FİYAT FARKI HESAP TABLOSU	
İşin Adı :  BELEDİYE BİNASI YAPIM İŞİ 	Sayfa No :	1	
	Hakediş No :	02	
Hakediş Tutarı (A)	Avans Mahsubu (Varsa) (B)	Fiyat Farkına Esas Tutar (An=A-B)	
1.680.682,21		1.680.682,21	
FİYAT FARKI FORMÜLÜ	
F = An x B x (Pn - 1)
Baz Endeks Dönemi : 01 / 2017 (Ocak)
Pn = Gn/Go	
Mart 2017  Dönemi Fiyat Farkı Hesabı	F.F. Tutarı : 5.113,68	
An = 449.799,71 	B=0.90	Pn=1,012632	2013/5217 Bakanlar Kurulu Kararı, Fiyat Farkı Esasları Madde 7.5 uygulanmıştır.	
Endeks	Baz Endeks	Güncel Endeks	Güncel Endeks Dönemi		
G	284,990	288,590	Şubat 2017		

Nisan 2017  Dönemi Fiyat Farkı Hesabı	F.F. Tutarı : 5.950,24	
An = 523.383,46 	B=0.90	Pn=1,012632	2013/5217 Bakanlar Kurulu Kararı, Fiyat Farkı Esasları Madde 7.5 uygulanmıştır.	
Endeks	Baz Endeks	Güncel Endeks	Güncel Endeks Dönemi		
G	284,990	288,590	Şubat 2017		

Mayıs 2017  Dönemi Fiyat Farkı Hesabı	F.F. Tutarı : 6.148,58	
An = 540.829,57 	B=0.90	Pn=1,012632	2013/5217 Bakanlar Kurulu Kararı, Fiyat Farkı Esasları Madde 7.5 uygulanmıştır.	
Endeks	Baz Endeks	Güncel Endeks	Güncel Endeks Dönemi		
G	284,990	288,590	Şubat 2017		

Haziran 2017  Dönemi Fiyat Farkı Hesabı	F.F. Tutarı : 1.894,83	
An = 166.669,47 	B=0.90	Pn=1,012632	2013/5217 Bakanlar Kurulu Kararı, Fiyat Farkı Esasları Madde 7.5 uygulanmıştır.	
Endeks	Baz Endeks	Güncel Endeks	Güncel Endeks Dönemi		
G	284,990	288,590	Şubat 2017		

Bu Hakediş İçin Ödenecek Fiyat Farkı  F1 = 	19.107,33	
Önceki  Hakediş Kümülatif Fiyat Farkı  F0 = 		
Bu Hakediş Kümülatif Fiyat Farkı F=F1+F0 = 	19.107,33